Уважаемые студенты! Объясните как рассчитываются  показатели в ТЭП: 5.​ Коэффициент неравномерности – 1,4
6.Максимальное кол – во рабочих – 7 человек.  7.Среднее количество рабочих – 5 человек

РЕФЕРАТ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТУ, КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ РАБОЧИХ, ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ, ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОХРАНА ТРУДА,ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
Объект проектирования Двухэтажный одноквартирный жилой дом
Цель работы – организация строительной площадки, разработка календарного плана строительства, подсчет технико-экономических показателей.
В процессе работы, выполнен подсчет объемов работ, на отдельный вид работ, произведен расчет потребности в рабочей силе машинах и механизмах, материалах, временных зданиях и сооружениях.
В результате проектирования были определены: объемно-планировочные и конструктивные решения, соответствующие назначению здания, достигнута экономия материалов, соблюден нормативный срок строительства, применен прогрессивный поточный метод производства строительно - монтажных работ.
Производственные процессы по максимуму механизированы, так же использовались новые средства малой механизации при производстве отделочных работ.

ВВЕДЕНИЕ

Объём жилищного строительства , за последние 10 лет сократился почти вдвое.
Нехватка средств не позволяет строить всё новые и новые жилые здания.
Но в настоящее время появляются новые материалы которые способствуют , ускорению строительства но при этом сохраняются ,качества и увеличивается срок эксплуатации и службы зданий.
Главной задачей государства является обеспечение ,по возможности приобретения и строительства зданий жилого фонда.
Мой проект:<<Проект производства работ на строительство 2-х этажного одноквартирного жилого дома, для проживания одной семьи (многодетной)>>.

1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Технологическая карта - один из элементов проекта производства работ, содержащих комплекс инструктивных указаний по рациональной технологии и организации строительного производства: их задача – способствовать уменьшению, трудоемкости, улучшению качества и снижению стоимости строительно-монтажных работ.
Технологическая карта разработана на проведение кровельных работ, с целью установления способов и методов выполнения работ, уточнения их последовательности и продолжительности, определения необходимых для их осуществления количества рабочих, а также материальных и технических ресурсов.
При разработке технологической карты в основу проектирования были положены следующие принципы:
1.	прогрессивная технология и передовые методы ведения строительного процесса;
2.	комплексная механизация с использованием высокопроизводительных машин и механизмов;
3.	выполнение строительного процесса поточным методом;
4.	научная организация труда;
5.	обоснование выбора метода производства работ технико-экономическими расчетами, сравнение с передовым опытом строительства;
6.	соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при проектировании технологической последовательности производства работ.

1.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.Технологическая карта разработана на кровельные работы. 2.Предназначенна для определения затрат труда и рабочего времени.
Технологическая карта выполнена на основе прогрессивных технологий, с учетом новых технических средств, индустриализации и комплексной механизации процессов предусмотренных комплексом работ при устройстве кровельных работ.
При этом обеспечивается: высокая производительность труда, улучшается качество работ и снижается себестоимость продукции. Данная технологическая карта регламентирует последовательность и режимы выполнения работ по устройству кровельных работ , на базе современных прогрессивных технологий и практики строительства.

1.2 ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Шифер — это кровельный материал, изготовленный из асбоцемента. Выпускается листами разных габаритов и сечения. Для кровельных работ применяют листы с волнообразной поверхностью. Несмотря на то, что в большинстве стран применение асбеста ограниченно, из-за его канцерогенных (вызывающих онкологические заболевания) свойств, в Российской Федерации он до сих пор широко применяется.
Промышленность выпускает всего три типоразмера шифера:
•	шифер обыкновенный (ВО) — сфера применения — малое домостроение;
•	шифер усиленный (ВУ) — сфера применения — строительство производственных зданий (отличается от ВО габаритами и массой);
•	шифер унифицированный (УВ) — применяется как в производственном, так и гражданском строительстве.
Причины дефектов поверхности шифера и способы их устранения
Как строительный материал, шифер не обладает способностями к длительному противостоянию скачкам температуры. Из-за неровностей поверхности на нем прекрасно живет и размножается мох, грибок и прочее. Шифер хрупкий, тяжелый и неудобный материал для перевозки, складирования и монтажа.
Общий список дефектов выглядит примерно так:
•	повреждение листа во время перевозки;
•	повреждение поверхности и структуры листа в процессе проведения монтажных работ. Возникновение трещин при чрезмерном усилии, приложенном при наворачивании крепежного винта. Недостаточного диаметра отверстия для винта;
•	образование дефектов при перепаде температур и воздействий по время работ, проводимых на крыше: монтаже антенн или иного оборудования;
•	разрушение листа под воздействием биологических факторов — мха, грибка, лишайника
•	Укладка листа. Начинаем от кромки крыши в сторону конька, то есть снизу вверх, выпуск листа над кромкой может составить порядка 100-200 мм. Укладка первого листа должна проходить таким образом, чтобы нижняя часть волны легла на крайнюю стропилину. Выпуск со стороны фасада может быть тоже порядка 100-200 мм.
•	Фиксация листа и укладка первой полосы. Для фиксации асбестоцементного листка к стропилам лучше применять шурупы, на которых установлено резиновое уплотнение. Выровняв первый лист, его полностью закрепляем к стропилам. Следующий лист кладется внахлест с перекрытием не менее 100 мм. На самом деле эту длину рассчитайте так, чтобы верхний край верхнего листа располагался на коньке крыши. Закрепив один ряд, осуществляется переход на закрепление второго ряда.
•	Укладка остальных листов. Листы нового ряда укладываются с перехлестом на одну-две волны, и операция повторяется. Точно так же закрывается второй скат крыши. Швы в местах стыков листов целесообразно обработать силиконовым герметиком.
После окончания работ по укладке шифера, нанесите кровельную краску. Она продлит время службы покрытия.Принимайте меры предосторожности: например, при передвижении по шиферу понадобятся деревянные трапы и применяйте только специальный крепеж.

Техника безопасности при кровельных работах

Кровельщики должны быть обуты в нескользящую обувь, при уклоне кровли 20 0 и работе на краю крыши должны иметь предохранительные пояса с прочной страховкой. Во время тумана, ветра, дождя, грозы, а так же в темное время при отсутствии должного освещения выполнять кровельные работы запрещено. Во время производства кровельных работ вдоль наружных стен создается ограждение шириной 3метра

1.3 КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

Прежде чем приступить к укладке шифера, необходимо знать, сколько материала понадобится на всю крышу. Расчет шифера на крышу производится следующим образом:
•	Длина здания делится на ширину асбестоцементного листа, который выбран в качестве покрытия. К полученному результату прибавляется 10%. Эта величина пойдет на нахлест листов шифера по вертикали. В итоге получается количество листов, нужное для укладки одного ряда.
•	Затем нужно узнать длину ската крыши от конька до карниза. Полученную цифру следует разделить на длину шиферного листа. К полученному результату прибавляется 13%. Эта величина идет на нахлест листов по горизонтали. Таким способом узнается количество рядов на одном скате крыши.
•	Полученное количество листов в одном ряду умножается на количество рядов, в результате получается необходимое количество листов для укладки шифера на крышу. Также подсчитывается количество листов для второго ската, если кровля двухскатная.

1.4 ТЕХНИКА – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКЗАТЕЛИ

Продолжительность выполнения процесса по графику – 15.1дней.
Фактическая продолжительность - 15 дней.
Нормируемая трудоёмкость выполнения работ – 43.41 чел/дня.
Фактическая трудоемкость – 43.41 чел/дня.
Норма выработки – 100%.

1.5 ОХРАНА ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТАХ

Кровельщики должны быть обуты в нескользящую обувь, при уклоне кровли 20 0 и работе на краю крыши должны иметь предохранительные пояса с прочной страховкой. Во время тумана, ветра, дождя, грозы, а так же в темное время при отсутствии должного освещения выполнять кровельные работы запрещено. Во время производства кровельных работ вдоль наружных стен создается ограждение шириной 3метра

1.6 ВРЕМЕННОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Источником теплоснабжения для жилого дома – ясли является котельная.
Температура теплоносителя 95°С – 70°С.
Трубы приняты стальные электросварные по ГОСТ 10704-91.
Трубы покрывают теплозащитой из минираловатной плиты толщиной 40 мм. Покрывной слой выполнен из рулонного стеклопластика. Антикоррозийная защита выполнена из температурно-устойчивого изола в 2 слоя по холодной мастике.

Qобщ. =(Q1+Q2)k1+k2

1.Контора:36*2.2=79.2м3

Q1=V*q0(tB-tn)=79.2*2.64*(20-(-20))=8.36кДж

2.Диспетчерская -7м2*2.2=15.4м3
Q=15.4*2.64*40=1624кДж
3.Гардеробная-29м2*2.2=63.8м3
Q=63.8*3.77*42=1010.2кДж
4.Умывальная – 6 м2*2,2=13,2
Q= 13,2*3,77*42=2090
5.Сушилка 5*2,2=11м2
Q=11*3,77*42=1742
6.Помещение для приема пищи 30*2,2=66м2
Q=66*2,64*40=6969
7.Туалет с умывальной 6*2,2=13,2м2
Q=13,2*2,64*40=1394
Qобщ. =*1,1*1,2=42610,9кДж/ч
Часовой расход тепла на технологические нужды
Nобщ. == /ч
Принимаем подачу тепла от существующей котельной.

1.6 РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ВОДОСНАБЖЕНИИ.

Диаметр трубы для временного водоснабжения рассчитывалась по максимальному расходу воды на производственные и хозяйственно- бытовые нужды, пожаротушения. Расчет диаметра трубы определен равным 26,8 мм.

В общ. = 0,5(В пр.+В хоз.)+В пож.

В пр. - производственные нужды.
В хоз. - хозяйственно бытовые нужды.
В пож. - пожаротушители.
Секундный расход воды на производственные нужды л/с.

В пр. = ∑ B1max.*k1/(t1*3600),

∑ B1max. - максимальный расходы воды.
k - коэффициент потребления Н2О, для строительных работ = 1,5.
t1 - количество часов работы, к которым отнесён расход воды.
В пр. = 1440*1,5/(8*3600) = 23550/28800 = 0,8л/с.
Секундный расход воды на хозяйственно бытовые нужды.

8.Вхоз. = ∑ B2max.*k2/(t2*3600),

∑ B2max. - максимальный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды
k2 - коэффициент неравномерности потребления, принимаемый по таблице.
t2 - число часов рабочих в смену.
∑ B2max. = 255*3/(8*3600)= = 450л. в смену.
В хоз. = 450*2/(8*3600) = 900/28800 = 0,03л/с.
Расход воды на пожаротушители на строительной площадке следует принимать 10л/с., т.е. предусматривать одновременное действие струй из трех гидрантов по 5л/с..
В общ. = 0,5(0,8+0,03+0,3)+10 = 10,57 = 0.54л/с.
Диаметр трубопровода для временного водопровода рассчитывают по формуле.

D = , или D = 2

так как π и 1000Врасч. Постоянные величины, то

D = 35,69
Врасч. = Вобщ.

D = 35,69 47.8мм.
υ - скорость воды; υ = 15:2 для больших диаметров и υ = 0,7:2 для малых.
Диаметр временного водопровода рассчитывают без учёта пожаротушения.
Вобщ. = 0,29+0,03+0,3 = 0.5л/с.
D = 35,69 = 21,41мм
Принимаем наружный диаметр по ГОСТУ равный 21,3мм, так как минимальный диаметр трубы для подключения пожарного гидранта равен 100 мм, принимаем наружный водопровод на строительной площадке диаметром 100 мм.

1.7 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ

Расчет мощности трансформатора велась по потребителям электроэнергии на производстве и технологические нужды, наружное и внутреннее освещение. Мощность трансформатора определена 50кВт.
Согласно таблице Справочника проектировщика организация строительства принят трансформатор мощностью 50кВт.
Мощность силовой установки для производственных нужд определяется по формуле:

Wпр = Σ Рпр*kc/cosφ,

kc- коэффициент спроса (А.Ф.Гаевой «Курсовое проектирование. Промышленные и гражданские здания» стр.200, таблица 78);
cosφ – коэффициент мощности (А.Ф.Гаевой «Курсовое проектирование. Промышленные и гражданские здания» стр.200, таблица 78).
Максимальная Wпр составляет 34кВт, по данному количеству и ведем расчет:

Wпр = Равт..кр * kc/cosφ = 34*0.3/0.5 = 20,4 кВт

Мощность сети наружного освещения находят по формуле:

Wн.о.=kcΣРн.о.
Мощность сети освещения территории производства работ, открытых складов, внутри построечных дорог и охранного освещения:

Wн.о.=kcΣРн.о.= 1*8,1=8,1 кВт

Мощность сети внутреннего освещения рассчитывается по формуле:

Wв.о.=kcΣРв.о.

Количество электроэнергии для внутреннего освещения определяется
Wв.о.=kcΣРв.о.= 0,8*4.8 = 3.8≈4 кВт
Следовательно общая мощность электропотребителей
Wобщ= 20,4 + 8,1 + 4= 32,5 кВт,
по которой и подбирается трансформатор.
Мощность трансформатора
Wтр= 1,1*29,54 = 39,4 кВт
Требуемая трансформаторная подстанция составляет-6 кв. и составляет мощность
50кв.,и массой -580кг.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО – СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Календарные планы является расчетно графическим документом, который координирует деятельность большого количества участвующих в строительстве организаций, предприятий и отдельных фирм. Он определяет последовательность и взаимозависимость, продолжительность и интенсивность работ, необходимость трудовых и технических, материальных и финансовых ресурсов.
Календарный план работ строительной организации является основным средством согласования организационных и технологических решений по возведению всех объектов заданной программы. Задача календарного плана состоит в организационной и технологической увязке работ, выполняемых различными подразделениями на различных объектах, с учётом возможностей рационального обеспечения этих работ всеми видами трудовых и материально-технических ресурсов, соблюдения установленных сроков ввода объектов в действие и организации производства непрерывным долгосрочным потоком.
При проектировании календарных планов необходимо соблюдать требования, изложенные в СниПе 3.01.01-85 «Организация строительного производства», в которых указано, что к основным работам по строительству разрешается приступать только после окончания подготовительных работ.
Задача календарного плана состоит в организационной и технологической увязке работ, выполняемых различными подразделениями на различных объектах, с учётом возможностей рационального обеспечения этих работ всеми видами трудовых и материально технических ресурсов, соблюдение установленных сроков ввода объектов в действие и организации производства непрерывным и долгосрочным потоком.
В левую часть плана вписывают все работы, которые необходимо выполнить на данном объекте в последовательности и при необходимости с объединением в циклы. В правой части календарного плана горизонтальными отрезкам показывают продолжительность каждого процесса. Если процесс ведут в две смены, то его показывают двумя параллельными отрезками.
График движения рабочих имеет вид многоступенчатой пирамиды, у которой довольно чётко должны просматриваться три примерно равные по длине части: левая часть – период разворачивания потока, средняя – период стабилизации потока и правая – период сворачивания потока.
Максимальное количество рабочих должно быть на объекте в период стабилизации потока. Численно поток характеризуется коэффициентом неравномерности движения рабочей силы, он должен быть в пределах 1,5.

2.2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА

Исходными данными для проектирования календарного плана производства работ являются:
1.	Директивные задание и нормативы продолжительности строительства;
2.	Рабочие чертежи и сметы;
3.	Данные о технических возможностей организаций – участников строительства;
4.	Технологическая карта на строительный процесс;
5.	Принятые методы производства работ и механизации;
6.	Определяются составы звеньев и бригад;
7.	Выбираются методы выполнения работ;
8.Определяется продолжительность работ и их взаимосвязь;
9.Составляется график потребности в ресурсах;
10.Расчетная продолжительность работ сравнивают с нормативной;
11.При наличии типовой ТК уточняет их привязку к местным условиям и применяет данные ТК в качестве расчетных;

2.3 РАЗБИВКА НА ЦЫКЛЫ

I. Подготовительные работы.
1. Устройство ограждения
2.Срубка деревьев и выкорчевка пней.
3.Снос старых строений
II.Возведение подземной части здания
1.	Вертикальная планировка
2. Устройство котлована под фундамент.
3.Монтаж свайных фундаментов с ростверком.
4.Монтаж блоков стен подвала.
5.Установка перекрытий над подвалом.
6.Обратная засыпка пазухов грунтом.
III.Возведение надземной части.
1. Кирпичная кладка стен .
2. Монтаж элементов перекрытий .
3. Устройство перегородок.
4.Монтаж элементов лестничной клетки.
5.Устройство кровли
6.Устройство оконных заполнений.
7.Устройство дверных заполнений.
8.Устройство скатной кровли.
IV. Отделочные работы и прочие.
1.Устройство пола.
2.Штукатурные работы.
3.Молярные работы.
4.Сантехнические работы.
5.Электромонтажные работы.
6.Слаботочные устройства.
7.Благоустройство.
8. Сдача объекта и не учтенные работы.
Подготовительные работы – производятся последовательно и не совмещаются.
Подземная часть – работы производятся последовательно так как работы не совмещаются.
Надземная часть – объединяем кирпичную кладку и монтаж элементов перекрытия,
Сантехнические работы объединяем с электромонтажными.
Благоустройство территории ведется в одну смену.

2.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЁМКОСТИ

Выбрав методы производства работ и механизмы для их выполнения, определяем трудоемкость работ по нормативным документам СНиП IV-2 82, ЕНиРам, ГСНам, ТЭРам и другим нормативным документам. Продолжительность видов работ зависит от общего срока строительства, определяемого СНиП 1.04.03 -85 (СН440 -79). Сокращения срока строительства достигается совмещением во время нескольких строительных процессов. Такие совмещения ограничивается требованиями технологии производства отдельных видов работ, а также требованиями охраны труда.
Для ускорения темпов строительства, повышения коэффициента использования машин, а так же для снижения стоимости строительных работ с применением крупных машин ведутся в две смены, но так при разработке технологической карты не учитывалось привлечение крупных машин и механизмов их работа ведется в одну смену.
Равномерность и бесперебойность движения рабочих определена общим графикам движения работ по отдельным профессиям.
По календарному плану строительство определёно по срокам выполнения работ и построения графика работ строительных машин, которые помещены на листе календарного плана.

2.5 РАСЧЁТ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА

I.Подготовительные работы –данные подготовительные работы назначаются не посредственно перед началом стройки , и место, сроки.
II.Подземная часть;
1.Вертикальная планировка ,=2.13+2.75=4.88
2.Разбивка котлована под фундамент:2.59*22/46.85=1.2
3.Забивка свай:83/1.04=83
4.Устройство ростверка.24.25*0.6/41.18=5.8
5.Устройство блоков стен подвалов,22*10.125/46.85=4.7
6.Перекрытие над подвалом,6*22/46.85=2.8
7.Обратная засыпка пазух грунтом,3.6*22/46.85=1.6
Определим количество человек требуемых на выполнение отельных видов работ: 1.Вертикальная планировка.0.125+1.125/0.5=2ч.
2.Разбивка котлована под фундамент,0.84+1.75/1=2ч.
3.Забивка свай,43.41/8.6=5ч.
4.Устройство ростверка.5.25/5+0.125/3=3ч.
5.Устройство блоков стен подавала ./0.7=3ч.
6.Перекрытие над подвалом.4.75+1.75/2=3ч.
7.Обратная засыпка пазух грунтом. 3.5+0.125/1=3ч.
III.Надземная часть.
Трудоёмкость собрана согласно объёмов работ .
Определим требуемое количество человек.
1.Кирпичная кладка стен.120+60.6/16=5.
2.Монтаж элементов перекрытия и покрытия.16+10.7/2=3ч.
3.Устройство перегородок.11.5+0.25/2=6ч.
4.Устройство деревянной лестницы .12.14+0.125/3=2ч..
6.Устройство скатной кровли.90.4+3/21=18ч.
7.Устроство оконных заполнений .11.5/3=4ч.
8.Устройство дверных заполнений.3.21/1=3ч.
IV.Отделочные работы .
1.22*37,87/191,5=4.3
2.6.25*22/191.5=1
3.6.25*22/191.5=1
4.39.8*22/191.5=4.6
5.32.2*22/191.5=3.7
6.14.5*22/191.5=1.6
7.18.1*22/191.5=2
8.36.2*22/191.5=4
Определяем среднее количество рабочих.
NСР.==5,где 5 среднее количество рабочих.
Максимум рабочих расположен на графике движения рабочих.
Коэффициент не равномерности рассчитан по формуле

k===1.4что коэффициент равен 1.4 1.5

2.6 Т.Э.П.

1.Продолжительность выполнения процесса по графику – 121д.
2.Фактическая продолжительность – 108 дн.
3.Фактическая трудоёмкость - 570.5ч/дня.
4.Норма выработки – 100%
5.Коэффициент неравномерности – 1,4
6.Максимальное кол – во рабочих – 7 человек.
7.Среднее количество рабочих – 5 человек.

3. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

3.1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Строительный генеральный план - является важным документом проекта производства работ. Он представляет собой план строительной площадки, на котором, кроме проектируемых и существующих постоянных зданий и сооружений, коммуникаций и дорог, механизмов, складских площадок, необходимых для производства строительно-монтажных работ.
Проектирование строительного генерального плана производилась соблюдением следующих принципов:
Временные здания и сооружения предусмотрены передвижными на колесах и в наименьшем количестве;
1.	Временные здания и сооружения размещены так, что они удобны в эксплуатации, не нарушают безопасность работ ;
2.	Протяжённость временных сетей водо– и энергоснабжения принята минимальная;
3.	Временные дороги и склады отвечают требованием безопасности и размещены так, что число перегрузок сведено к минимуму.
Объектный строительный генеральный план , разрабатывает подрядчик и проектно – технологическая организация на стадии рабочих чертежей в составе ППР отдельно на каждое строящиеся здание, входящее в общеплощадочные строительный генеральный план. В объектном строительном генеральном плане (М1:200) уточняют принципиальные решения, приняты в общеплощадочном СГП.
При размещении временных дорог на площадке стремятся обеспечить кольцевой объезд вокруг строящегося и ремонтируемого здания с устройством двух въездов – выездов с площадки. Движение при этом будет односторонним.
Для разработки объектного СГП и используется следующие исходные данные:
1.	Общеплощадочный СГП, рабочие чертежи, календарный план и технологическая карта, входящий в состав ППР данного объекта;
2.	Уточнения по рабочим чертежам данные потребности в ресурсах;
3.	Документы, входящие в состав исходного – разрешительной документации.
Порядок проектирования объектного СГП включает в себя следующие мероприятия:
1.Привязка к объекту грузоподъемных кранов и других механизмов с определением зон обслуживания, опасных зон, и т.д.
2.Определения необходимого объема ресурсов для строительства.
3.Определения количества рабочих , мест размещения в необходимом количестве временных зданий и сооружений производственного, административного и санитарно-бытового назначения;
4.Привязка систем инженерного обеспечения строительства
Если условия площадки не позволяет обеспечить кольцевой объезд, то ограничиваются дорогой с одной стороны здания с двумя выездами – въездами, но при этом должны быть предусмотрены разгрузочные площадки или вся дорога должна быть рассчитана на двухстороннее движение трассы. Участок дороги, на котором будут находиться машины во время разгрузки должен быть в зоне действия монтажного крана. Дороги должны быть размещены на площадке таким образом, чтобы грузопотоки не пересекались с движением рабочих.
При разработке строительного генерального плана для строительства здания, необходимо стремиться к рациональному использованию строительной площадки, что может быть достигнуто соблюдением следующих принципов:
Объем строительства временных зданий и сооружений должен быть минимальным;
имеющиеся на строительной площадке здания и сооружения, подлежащие сносу, использовать в период строительства в качестве временных сооружений;
размещать временные здания и сооружения, соблюдая правила техники безопасности и противопожарные нормы;
1.временные здания и сооружения располагать так, чтобы они были удобны в эксплуатации;
2.протяженность временных сетей водо- и энергоснабжения должна быть минимальной;
3.временные здания и сооружения предусматривать инвентарными, передвижными;
4.временные дороги, склады и площадки укрупнительной сборки надо размещать так, чтобы число перегрузок и перемещения строительных грузов на площадке было минимальным.
Исходные данные для проектирования строительного генерального плана.
Исходными данными для составления строительного генерального плана служат:
1.	календарный план со сводным графиком потребности в рабочих;
2.	перечень и количество строительных машин и механизмов;
3.	ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах;
4.	перечень, количество и размеры временных зданий, сооружений и складов;
5.	нормативные данные по проектированию строительных генеральных планов.

3.2 РАСЧЕТ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Расчет складов производится по трехдневному запросу местных материалов и десятидневному – привозные . Временные здания и сооружения рассчитывались по нормам, справочникам проектировщика организации строительства конструкция временных сооружений принята по нормативному документу, в зависимости от продолжительности срока строительства.
Для правильной организации складского хозяйства на строительной площадке необходимо предусмотреть:
1.	открытые площадки для хранения кирпича, железобетонных конструкций и других материалов и конструкций, на которые не влияют колебания температуры и влажности;
2.	навесы для хранения столярных изделий, рулонных материалов, асбестоцементных листов и т.д.
3.	закрытые склады для хранения лакокрасочных материалов, войлока, минеральной ваты, стекла и т.д.
Площадь слада рассчитывается по количеству материалов:

QЗАП =( QОБЩ / Т*)α*n*k,

где Qзап. – запас материалов на складе;
Qобщ – общее количество материалов, необходимых для строительства;
α - коэффициент неравномерности поступления материалов на склады, принимаемый для автомобильного и железнодорожного транспорта – 1,1;
Т – продолжительность расчетного периода;
n – норма запасов материалов в днях;
k – коэффициент неравномерности потребления материалов, принимае6мый 1,3.
Полезная площадь слада без проходов определятся по формуле:

F=Qзап/g,

где g –количество материалов укладываемое на 1 м2 площади склада.
Общая площадь:

S=F/β,

где β – коэффициент его использования, характеризуются отношением полезной площади склада к, общей. Коэффициент для закрытых складов , принимается: 0,6 – 0,7; для открытых 0,4 – 0,5.
Плиты перекрытия:
151м3*0.22=99.66м3
QЗАП = 99.66/9*1,1*3*1,3=238.17м3
F=238.17/0,75=317.56 м2
S=317.56/0.5=635.12м2
Кирпич:181.88*0.98+10.41*0.12=179.48
QЗАП=179.48/30=56.564м2/тыс.
F=56.564*1.4=79.2м2
S=79.2*0.25=19.8 4м2
Сваи:
QЗАП =58 /10*1,1*3*1,3=61,6 м3
F=61,6*0,4=15.4 м2
Дверные блоки:
QЗАП =50.11 /2*1,1*3*1,3= 107.4м3
F=107.4/44= 2.44 м2
S=2.44/0.6=4.06м2
Оконные блоки:
QЗАП=50.13*3*1.1*3*1.3=71.6м2
F=71.6/45=1.59м2
S=1.59/0.6=2.65м2
Кровельное покрытие:
QЗАП=107.1/20*1.1*3*1.3=22.9м2
F=22.9/1.5=15.2м2
S=15.2/0.6=25.32м2

3.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ

Определение площадей временных зданий и сооружений производится по максимальной численности работающих на строительной площадке и нормативной площади на одного человека, пользующегося данными помещениями.
Численность работающих определяют по формуле:

Nобщ = (Nраб + NИТР + Nслуж + NМОП)k

где Nобщ – общая численность работающих на строительной площадке;
Nраб – численность рабочих, принимаемая по графику изменения численности рабочих календарного плана;
NИТР – численность инженерно-технических работников (А.Ф. Гаевой «Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и гражданские здания», стр.192, таблица 69);
Nслуж – численность служащих;
NМОП – численность младшего обслуживающего персонала (МОП) и охраны (А.Ф. Гаевой «Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и гражданские здания», стр.192, таблица 69);
k – коэффициент, учитывающий отпуска, болезни, выполнение общественных обязанностей, принимаемый 1,05 – 1,06.
По календарному плану на строительстве работает максимальное количество людей – 7 человек. Таким образом, численность работающих N составит: N = 7*100/85 =8 чел.; следовательно, 1% составляет 0,76 человека; тогда NИТР = 2*0,26 = 1 чел.; Nслуж = 3*0,26 = 1 чел.; NМОП = 1*0,49 = 1чел.
Nобщ= (8+1+1+1)*1,05 = 12чел.
Временные здания размещают на участках, неподлежащих застройки основными объектами с соблюдением противоположных норм технике безопасности и санитарно-гигиенических условий ими должно быть удобно, пользоваться их объём должен быть минимальным.

Временные здания	Кло-во	Размеры здания, м	
Проходная, охрана ,диспетчерская	 1	 2x3	
Прорабская 	 1	 9х2.7 	
Гардеробная	 1	 11x3	
Помещение для приема пищи и отдыха	 1
	 9х2.7	
Туалет с умывальней	 1	 6х3	
Склад открытого хранения	 2	 11х3	
Навес для дверных блоков	 1	 5х3	
Склад закрытого хранения	 1	 2х3	

3.4 РАСЧЕТ ,ПОДБОР КРАНА.

Выбор монтажного крана производим по технологическим параметрам.
К технологическим параметрам крана относятся:
-требуемая грузоподъемность, Qк;
-наибольшая высота подъема крюка, Нк.
-наибольший вылет стрелы, Lк.
Выбор крана осуществляется расчётное – графическим способом:
Мт –Наибольшая масса самого тяжелого элемента равна 2.8 т.
Мст –Масса строительной оснастки 0,05
1.	Определяем грузоподъемность, т.

Qк= Мт +Мст
0,05 +2,8 = 2,85т.

2.	Определяем длину стрелы, м.

Lс = Нзд – h1 + bзд + 2а ;
Sin ɑ 2cos ɑ
9.84 – 1,5 +12 + 2.4= 16.6
0,6 1.6

Нзд – высота здания: 6.5 М
h1 – монтируемый элемент, 0.22 М
bзд – ширена здания ,12 м.
2а- расстояние от края здания или монтируемой конструкции до оси стрелы.
ɑ- угол наклона стрелы.
Ищем допустимый угол наклона стрелы крана ɑ:

Tg ɑ = 
Tgα=420

Монтируемая деталь:

Нзд<Lс sin ɑ - gt ɑ b + 2a + h1;
2
16.6*0,6-0,91*(6+1.4/2)+1,5 =6.76

Технологическая характеристика самоходного стрелового крана.
Марка крана КС-25-72
Длина максимальной стрелы,- 14 м.
Наибольший- 14 м
Высота подъема основного крюка -17м
Грузоподъёмность-6.3т
Ширина колеи-2м
Длина базы крана-4.7м
Высота крана-3.2м
Производительность-3.0м/ч
Сравниваем с технической характеристикой других самоходных кранов и выбераем наиболее приемлемый вариант: в техническом и экономическом отношении СК-2572: который, рентабельно использовать, так как у этого крана очень высокие показатели, очень прост в эксплуатации и техническом обслуживании.
Определяем зону влияния крана.
При размещении строительных машин следует установить опасные для людей зоны.
1.Участки над которыми приходится перемещения грузов подъемными кранами. Эта зона ограждается защитными ограждениями.
2.Участки территории вблизи строящегося здания и сооружения и этажи, ярусы здания и сооружений в одном захвате, над которыми и происходит монтаж конструкций или оборудования. Эта зона ограждается сигнальными ограждениями.
3.В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие нормативы предусматривают различные зоны:
Монтажную зону , зона облуживания крана, зона перемещения груза, зона работы крана, зона работы подъемника, опасная зона монтажных оборудований.

Ron = Rmax + 0,51max + 1без

R max- максимальный рабочий вылет стрелы крана, 14 м;
Lmax – половина длены наибольшего перемещаемого груза,3 м;
1без - дополнительной расстояние для безопасной работы - возможное расстояние груза в случае поденияв следствие расчета его на крюке под динамическим воздействием движения крана и силы давления ветра. Зависит от высоты падения груза,(5 м.)
0,51 max½ длина самого длинного элемента;

3.5 ТЭП.

1.Площадь застройки
2.Площадь строительной площадки – 1103 м²
3.Протяженность временных дорог – 34,8м
4. Продолжительность пешеходных тротуаров – 28,1 м
5.Площадь хранения открытого склада - 725.78 м2
6.Площадьзакрытого склада – 6.71 м2.
7.Протеженность коммуникаций-24 68м2.

4. ОХРАНА ТРУДА

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, сенитарно - гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
Охрана труда заключает в себе:
1.	трудовое законодательство, предусматривающее и разрешающее правовые вопросы о трудовых взаимоотношениях на производстве, о режиме рабочего времени и отдыха, условиях труда женщин и подростков;
2.	технику безопасности, отражающую организационные и технические мероприятия при выполнении строительно-монтажных и специальных работ независимо от ведомственной подчиненности и принадлежности строительных организаций и фирм, выполняющих эти работы;
3.	производственную санитарию, учитывающую влияние условий труда на организм и здоровье человека; разрабатывает и осуществляет меры по оздоровлению условий труда в производственных процессах и профилактические санитарно-гигиенические мероприятия;
4.	противопожарную безопасность, предусматривающую мероприятия по предупреждению пожаров и установлению нормы проектирования здания с целью улучшения их противопожарного состояния.
Важнейшей задачей охраны труда является предупреждение аварий и опасностей, которые могут возникнуть в процессе производства строительно-монтажных работ.
Мероприятия в строительстве по охране труда предусматривают выполнение следующих условий:
1.	соблюдение рабочими, инженерно-техническими работниками и служащими норм, правил и инструкций по безопасным методам труда;
2.	систематическая проверка зданий, механизмов, приспособлений и инструментов рабочих;
3.	проведение регулярной пропаганды о безопасных условиях труда;
4.	проведение обучения и профессиональной подготовки работников;
5.	регулярное проведение инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности;
6.	внедрение научной организации труда, техническое переоснащение рабочих мест с заменой морально устаревшего инструмента и оборудования;
7.	улучшение условий труда женщин;
8.	проверка соответствия рабочих профессиям;
9.	обеспечения рабочих в средствах индивидуальной защиты;
10.	работники, занятые на тяжелых работах с вредными условиями труда, а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры.

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Техника безопасности при производстве земляных работ
Земляные работы разрешается выполнять только по утвержденному проекту производства работ.
В зоне расположения действующих поземных коммуникаций земляные работы выполняют по письменному разрешению соответствующих организаций в присутствии их представителя.
В непосредственной близости к электрокабелям, газопроводам и т.п. запрещается применять «ударные» инструменты (ломы, кирки, клинья). Грунт разрабатывают только лопатами. В случае обнаружения подземных сооружений, не предусмотренных проектом, работы приостанавливают до получения дополнительных указаний.
Для спуска рабочих в котлованы и широкие траншеи пользуются стремянками шириной не менее 0,6 м с перилами.
В пределах призмы обрушения нельзя размещать материалы, устанавливать строительные машины и допускать их движение.
Экскаваторы во время работы должны стоять на спланированной поверхности. Погрузка автомашин производится так, чтобы ковш подавался со стороны заднего или бокового борта. Образующиеся при разработке грунта «козырьки» необходимо сразу срезать.
При работе бульдозеров запрещается: перемещать грунт на подъем более 15° и под уклоном более 30°; выдвигать отвал за бровку откоса выемки. При совместной работе с экскаватором не допускается нахождение бульдозера в радиусе действия стелы.

5.1 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ОСНОВАНИЙ

До начала работ необходимо проверить устойчивость и прочность заложенных откосов и установленных креплений стен траншей и котлованов, чтобы предупредить обвалы и оползни.
При закреплении грунтов нужно соблюдать требования, предусмотренные для работ на компрессорных, гидравлических, электрических и паровых установках.
При контроле качества уплотнения радиометрическими приборами источники гамма-излучений хранят в свинцовых контейнерах в специально отведенном месте.
К работе с радиометрическими приборами допускаются только специально обученные лица.
строительство двухэтажный дом
5.2 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА

К выполнению свайных работ и управлению свайным копром допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие обучение со сдачей экзаменов, получившие удостоверение на право управления соответствующей машиной и прошедшие медицинское освидетельствование. До начала работ необходимо проверить: исправность механизмов и рабочего инструмента; состояние тросов и такелажных приспособлений; действие тормозов лебедок и автоматического управления; звуковые и световые сигнальные устройства.
Запрещается передвигать копер с подвешенной на стреле сваей. Во время перемещения или поворота копра свайный молот должен быть закреплен в нижнем положении. Монтаж копровой установки непосредственно под проводами действующих линий электропередач запрещается.
Лебедки, применяемые для копрового оборудования, должны быть исправными, освидетельствованы и испытаны на предельно допустимую нагрузку.
Рельсовые копры закрепляют противоугонными устройствами, а при высоте копра более 10 м еще и растяжками.

5.3 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Допуск к монтажу строительных конструкций могут получить лица, имеющие удостоверение на право производства работ и достигшие 18 лет, обученные по специальной программе, прошедшие медицинский осмотр, инструктажи (вводный и на рабочем месте) по технике безопасности и пожарной безопасности.
К верхолазным работам, т. е. работам, выполняемым на высоте более 5 м от поверхности грунта, перекрытия или настила, допускают: специально обученных монтажников — мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, прошедших медицинский осмотр на годность к верхолазным работам , имеющим тарифный разряд не ниже 3-го и стаж монтажных работ не менее 1 г.
Стропальщики и сварщики обучаются по специальным программам Госгортехнадзора. В рабочее время они должны иметь при себе удостоверение на право производства работ.
Основными средствами создания условий для безопасной работы и перемещения на высоте являются временные настилы, подмости и ограждения, защитные сетки, страховочные, канаты, предохранительные пояса и монтажные каски.
Грузоподъемные машины, механизмы и приспособления до начала работ должны быть зарегистрированы и технически освидетельствованы в соответствии с правилами Госгортехнадзора.
При ветре силой более 6 баллов (скорость 10,8... 13,8 м/с) работу прекращают, а кран закрепляют противоугонным приспособлением.
Монтажные лебедки для подъема грузов испытывают один раз в год нагрузкой, в 1,25 раза превышающей рабочую, а лебедки для подъема людей — статической и динамической нагрузками, превышающими их грузоподъемность соответственно в 1,5 и 1,1 раза.
Съемные грузозахватные приспособления при техническом освидетельствовании после изготовления или ремонта, а при эксплуатации через каждые 6 мес. осматривают и испытывают нагрузкой, в 1,25 раза превышающей их номинальную грузоподъемность, с длительностью выдержки 10 мин.
Совмещение монтажа с какими-либо другими работами по одной вертикали в пределах монтажного участка запрещается.
Техника безопасности гидроизоляционных и кровельных работ.
Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается после осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности несущих конструкций крыши и ограждений.
При выполнении работ на крыше с уклоном более 20° рабочие должны применять предохранительные пояса. Места закрепления предохранительных поясов должны быть указаны мастером или прорабом.
Для прохода рабочих, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих, необходимо устраивать трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы должны быть закреплены.
Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных проектом производства работ, с принятием мер против их падения, в том числе от воздействия ветра.
Во время перерывов в работе технологические приспособления, инструмент и материалы должны быть закреплены или убраны с крыши.
Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра скоростью 15 м/с и более.
Элементы и детали кровель, в том числе компенсаторы в швах, защитные фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п. следует подавать на рабочие места в заготовленном виде.
Заготовка указанных элементов и деталей непосредственно на крыше не допускается.
При выполнении кровельных работ с применением битумных или наиритовых мастик помещения для отдыха, обогрева людей, хранения и приема пищи следует размещать не ближе 10 м от рабочих мест.
Разогретую мастику и асфальтовую массу доставляют к рабочим местам в баках, плотно закрытых крышками и заполненными не более чем на 3/4. Поднимать баки с горячей мастикой по вертикали вручную запрещено.Рабочие должны иметь специальную обувь, предохраняющую от ожогов, и носить брюки обязательно навыпуск. Рабочих обеспечивают резиновыми сапогами, фартуками, брезентовыми куртками и брюками, а также брезентовыми рукавицами и нарукавниками.
При работе на мокрой кровле независимо от уклона, а на сухой кровле при уклонах более 25° рабочие должны иметь надежно закрепляемые переносные стремянки. Запрещено выполнять кровельные работы при ветре, достигающем 6 и более баллов, при густом тумане, гололедице, ливневом дожде и сильном снегопаде.
В построечных условиях кровельные мастики готовят на специальных площадках, удаленных не менее чем на 50 м от огнеопасных строений. Котлы наполняют не более чем на 3/4 вместимости. При воспламенении мастики котел плотно закрывают крышкой и тушат огонь огнетушителями или песком.
Запрещается курить при работе с растворителями, грунтовками и мастиками.

5.4 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Средства подмащивания, применяемые при штукатурных или малярных работах, в местах, под которыми ведутся другие работы или есть проход, должны иметь настил без зазоров.
При производстве штукатурных работ с применением растворонасосных установок необходимо обеспечить двустороннюю связь оператора с машинистом установки.
Для просушивания помещений строящихся зданий и сооружений при невозможности использования систем отопления следует применять воздухонагреватели (электрические или работающие на жидком топливе). При их установке следует выполнять требования Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ. Малярные составы следует готовить, как правило, централизованно. При их приготовлении на строительной площадке необходимо использовать для этих целей помещения, оборудованные вентиляцией, не допускающей превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Помещения должны быть обеспечены безвредными моющими средствами и теплой водой.
Эксплуатация мобильных малярных станций для приготовления окрасочных составов, не оборудованных принудительной вентиляцией, не допускается.
Тару с взрывоопасными материалами (лаками, нитрокрасками и т.п.) во время перерывов в работе следует закрывать пробками или крышками и открывать инструментом, не вызывающим искрообразования.
При выполнении малярных работ с применением составов, содержащих вредные вещества, следует соблюдать Санитарные правила при окрасочных работах с применением ручных распылителей. Через каждые 3 мес. работающие с вредными составами должны проходить медицинский осмотр. Им надо разъяснить, в каких случаях обязательно пользоваться респираторами, защитными очками и специальной одеждой.
Металлические части машин, работающих при напряжении более 36 В, надо заземлять, а выключатели помещать в закрытом ящике. Должна быть предусмотрена возможность отключения всех электроустановок в пределах объекта или участка работ.
Пневматические аппараты перед применением следует испытать на давление, в 1,5 раза превышающее рабочее. Манометры этих аппаратов должны быть опломбированы. Окраску потолков нужно вести в очках и защитных колпаках. При работах с известковыми и опасными химическими составами применяют резиновые перчатки . В помещениях, окрашиваемых масляными, эмалевыми и нитрокрасками, пребывание людей свыше 4 ч не допускается.

5.5 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ

Рабочие должны быть снабжены защитными касками, щитками и масками, спецодеждой и специальной обувью, перчатками и нарукавниками, респираторами с химическими фильтрами .Пустые газовые баллоны следует хранить отдельно от баллонов, наполненных газом. Баллоны должны предохраняться от ударов при переносе, действий прямых солнечных лучей и отопительных приборов. По окончании работы они должны храниться в специально отведенных местах, а ацетиленовые генераторы — дополнительно освобождаться от карбида кальция.
Не допускается использовать не принятые в эксплуатацию в установленном порядке электрические сети, распределительные устройства, щиты, панели и их отдельные ответвления и присоединять их в качестве временных электрических сетей и установок, а также производить электромонтажные работы на смонтированной и переданной под наладку электроустановке без разрешения наладочной организации .Лица, занятые на электромонтажных работах, не должны выполнять работы, относящиеся к эксплуатации электрохозяйства заказчика и генерального подрядчика.

5.6 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Под пожаром понимается неконтролируемый процесс горения, при котором возможны уничтожения материальных ценностей и опасности для жизни людй: неосторожное обращение с огне; несоблюдение правил эксплуатации производственного оборудования; самовозгорание или поджог веществ и материалов; замыкания в электрической сети; грозовые разряды и др.
Находящиеся в очаге пожара сгораемые конструкции и материалы нагреваются и воспламеняются, а не сгораемые теряют механическую прочность и деформируются. Продукты горения могут обладать повышенной токсичностью.
Россия в прошлом много раз страдала от крупных пожаров, поэтому в 1832 г. В первый строительный устав( сейчас СниП) были введены мероприятия по пожарной безопасности зданий. В настоящее время пожарная безопасность в строительстве регламентируется государственным стандартом и СНиП II-89-80, СНиП II-109-79, СНиП II-4-80*, ведомственными правилами и инструкциями, в частности Правилами пожарной безопасности при производстве СМР ГУПО МВД.
Система противопожарной защиты контролируется Главным управлением пожарной охраны МВД РФ и подведомственными ему подразделениями в регионах. В обязанности этих учреждений входит:
- разработка правил и нормативов пожарной безопасности;
-контроль за выполнением требований пожарной безопасности всеми предприятиями, фирмами и должностными лицами;
- проверка боеспособности пожарных подразделений и исправности средств пожарной сигнализации и пожаротушения;
- участие в комиссиях по приемки зданий и сооружений.
Общественность участвует в в деле предупреждения и тушения пожаров по линии добровольных пожарных дружин и пожарно – технических комиссий.
Специальным приказом начальника строительства на начальников участков, цехов, подразделений возлагается ответственность за обеспечение пожарной безопасности, а те, в свою очередь, организуют инструктажи и занятия по изучению правил безопасности и осуществлению необходимых мероприятий в случае возникновения пожара.
Главной обязанностью всех ИТР является поддерживание на стройплощадке должной культуры производства:
- исправная звуковая и световая сигнализация( сирены, плакаты);
-пожарные гидранты и водоемы вместимостью не менее 100 м3; исправное состояние внутриплощадочных дорог, проездов и подъездов, их хорошее освещение, отсутствие загроможденности и т. Д.
- исправная телефонная связь;
- действующие сети аварийного освещения;
- систематическое удаление со строительной площадки в отведенные места на расстояние не менее 50 м пожароопасных строительных материалов и отходов ( стружки, опилки, пакля и т. Д .);
-оборудование специальных мет для курения, хранения газовых баллонов и ацетиленовых генераторов;
- содержание в исправном состоянии пожарных щитов, оборудованных топорами, ломами, лопатами, ведрами, баграми, огнетушителями, емкостями с песком.

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Охрана окружающей среды рассматривается как «совокупность научных, правовых и технических мероприятий, направленных на рациональное использование, воспроизводство и сохранение экологического равновесия».
Охрана окружающей среды включает предупредительные меры и меры активного воздействия человека и общества. Предупредительные меры - это создание условий для сохранения экологического равновесия в том или ином регионе или для саморегулирования и самовосстановление измененных человеком природных комплексов и их компонентов. Активные меры - это действия общества, направленные на предупреждение или устранение загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, земель, внедрение технологий, обеспечивающих экономное расходование естественных ресурсов и получаемого из них сырья, действия, осуществляемые с целью ликвидации или ослабления негативных природно-антропогенных процессов.
Природоохранные мероприятия необходимы на всех этапах деятельности по природопользованию: в ходе проектирования, строительства, эксплуатации хозяйственных объектов. В Федеральном законе « Об охране окружающей среды» подчеркивается, что при размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, реконструкции объектов природопользования должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки, применяется ресурсосберегающие, малоотходные и другие современные технологии, способствующие рациональному использованию и воспроизводству естественных ресурсов.
Закон не разрешает ввод в эксплуатацию инженерных сооружений и других объектов, не оснащенных техническими средствами и технологиями обезвреживания и безопасного размещения отходов производства и потребления, обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ, Большие требования в области охраны окружающей среды предъявляются при размещении, проектировании, строительстве городских поселений. Они призваны обеспечить благоприятное состояние среды для жизнедеятельности человека, а также для обитания растений и животных, устойчивого функционирования естественных экологических систем. Здания строения должны размещаться с учетом требований охраны природы, санитарно-гигиенических норм и градостроительных принципов. При планировании и застройке городских поселений необходимо принимать меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий и другие меры природоохранного характера.
Для охраны окружающей среды городских поселений создают защитные и охранные зоны, озеленение территорий, зеленые пояса, включающие лесопарковые зоны и другие, изъятые из интенсивного хозяйственного использования защитные и охранные территории с ограниченным режимом использования природных ресурсов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной курсовой работе по теме «Двухэтажный одноквартирный жилой дом» я запроектировал : Общая высота здания в месте с кровлей составляет 10.2 м, ширина здания 12 м, длина составляет 14.4 м.
В жилом здании предусмотрены все комфортные условия для проживания. В данной работе были проведены следующие расчеты:
1.Расчет технологической карты на устройство свайных фундаментов.
2.Расчет календарного плана.
3.расчет крана;
4.расчет складских площадок;
5.расчет временных зданий и сооружений;
6.потребность строительства в электроэнергии.
Особенностью данного проекта является внедрение энергосберегающих технологий строительства. Выполненный анализ природных условий и состоянии городской среды застраиваемой территории с учетом требований
Градостроительного кодекса РФ (1998г.) и СНиП 11-02-96, позволяет предусмотреть необходимые фундаменты и конструкции сооружений, мероприятия по инженерной защите территории (объекта) от ОГП, рациональному использованию городских земель. Достигнуты максимально комфортные условия для проживания.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.	Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: Учеб.для строит. техникумов по спец. 1202 «Прои. и гражд. стр-во». – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1999. – 351,с.: ил.
2.	Отрепьев В.А. Масюк С.В. и Технология и организация строительного производства. Учебник для техникумов. М., Стройиздат, 1999. – 621 с. с ил.
3.	Барканов М.Б. Технология и организация строительства и ремонта зданий и сооружений: Учеб.для техникумов по спец. «Техническая эксплуатация зданий». – М.: Высш. шк.,2000. – 320 с. ил.
4.	В.И. Лапидус, А.А. Тереньтьев, В.В. Соколовский «Технология возведения зданий и сооружений». Учебник для вузов -М.: высша школа. 2001 – 320с.
5.	Соколов Г.К. Технология строительного производства: Учебник для сред.проф. образования / Геннадий Константинович Соколов. – изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 544с.
6.	Соколов Г.К. Технология и организация строительства: Учебник для сред.проф. образования / Геннадий Константинович Соколов. – 3-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 528 с.
7.	Серов В.М. Технология и организация и управление строительства: Учебник для сред. проф. образования , изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 432 с Сугробов Н.П. и др. Охрана труда в строительстве. Учебник для техникумов / Н.П. Сугробов, В.И. Поляков, Н.Ф. Бубыль. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 2001. – 341 с., ил.
8.	Орлов К.С. Монтаж санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования: Учеб.для нач. проф. образования: Учеб.пособие для сред. проф. образования. – М.: ПрофОбрИздат, 2002. – 352 с.
9.	Сугробов Н.П. и др. Охрана труда в строительстве. Учебник для техникумов / Н.П. Сугробов, В.И. Поляков, Н.Ф. Бубыль. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1985. – 341 с., ил.
10.	О.Н. Куликов, Е.И. Ролик «Безопасность жизнедеятельности в строительстве» учебное пособие для студ., высших уч.,зав./ О.Н. Куликов, Е.И. Ролик-М.: Издательский цент «Академия»,2009.-384с.
11.	СНиП 2.04.01-85 «Водопровод и канализация»
12.	ТЕР 81-02-07-2001 Сборник №7 «Бетонные и железобетонные конструкций
Размещено на Allbest.ru